АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от	20.03.2023г.	№	28	

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 13.03.2023г. № 1 на выполнение работ по благоустройству мемориала погибших односельчан в д. Лучеса Починковского района Смоленской области

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с тем, что исполнение муниципального контракта по независящим от сторон муниципального контракта обстоятельствам невозможно без изменения условий

1.	Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 13.03.2023 г. № 1 на выполнение работ по ИКЗ 233671200776967120100100030014399244.
1.1.  В связи с тем, что Подрядчиком перенесен срок начала работ предусмотренный Контрактом, Стороны приняли решение о переносе срока начала работ и  продлении срока исполнения Контракта.
1.2. Пункт 4.2. раздела 4 Контракта  изложить в следующей редакции: «Срок  выполнение работ с 01.05.2023г по 01.07.2023г..».
1.3. Приложения №1 Техническое задание на выполнение работ являющееся неотъемлемой частью Контракта, изложить в следующей редакции: « начало работ 01.05.2023г.  окончание выполнения работ – 01.07.2023г. 2023 года включительно».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
3.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Глава муниципального образования
Ленинского сельского поселения
Починковского района Смоленской области                           О.Е.Летова